제240회 동작구의회 임시회

2014. 주 요 업 무 계 획

도로관리과

순        서

Ⅰ. 일 반 현 황	1

□ 인력 및 조직현황	1

□ 도로 및 도로시설물 현황	2

조례·규칙·훈령 및 위원회 현황	3

Ⅱ. 2014 주요업무계획	5

6

주 요 사 업

1.본동 동양중학교 옆 도로개설공사 시행(신규)	6

2.노후·불량도로 정비공사 시행(구 주민참여예산)(신규)	8

3.노후·불량도로 정비공사 시행(서울시 주민참여예산)(신규)11

4.급경사도로 제설작업 자동화 시범사업 시행(신규)	14

5.불합리한 교차로 구조개선공사 시행(신규)	17

6.남성초교 앞 교차로 주변 공공공지 조성공사 시행(계속)	20

7.사당동 진흥아파트 옆 도로개설공사 시행(계속)	22

8.포장도로 유지관리사업(연간단가) 시행(계속)	24

9.도로시설물 유지관리사업(연간단가) 시행(계속)	25

10.도로굴착·복구공사(연간단가) 시행(계속)	26

11.도로조명시설물 유지관리사업(연간단가) 시행(계속)	27

29

일 반 업 무

1. '13/'14년 겨울철 제설대책 추진	29

2. 장기 미집행 도시계획시설(도로) 매수청구	31

3. 동작구 기술자문단 운영	32

Ⅰ. 일  반  현  황

1		인력 및 조직현황

□ 인력현황

○ 총 4개팀 (도로계획팀, 도로관리팀, 도로굴착팀, 도로조명팀)

○ 정‧현원 현황                                            (단위 : 명)

구 분	총원	기 술 직					행정직		관리 운영직	비 고
		5 급	6 급	7급	8급	9급	6급	7급
현원/정원	24/31	1/1	6/4	8/7	4/7	1/5	1/0	0/1	3/6	공무직 4명
과부족	△7	-	2	1	△3	△4	1	△1	△3

□ 조직현황

․도시계획시설(도로)사업 계획수립 및 집행(도로개설)

․도로 및 토목공사 설계, 시공 및 감독

․비 관리청 도로개설 공사의 허가(협의)

․토목사업 중장기 재정계획 수립 조정 및 예산편성 집행

․장기 미집행도시계획시설 매수청구 토지매입

․건설사업 표준설계 공통기준 정비

․동작구 기술자문단 운영

계

도로계획팀

․도로 및 육교·지하보차도 등 각종 도로시설물 유지관리

․도로보수(직영)기동반운영(현장순찰, 견문사항처리 등)

․제설작업계획수립 및 실시

․교통기본계획에 따른 협의 및 사고보상업무

․공공근로 및 희망근로사업 업무

도로관리팀

․도로굴착승인(유관기관허가) 및 굴착복구공사장 관리감독

․도로상 불량맨홀 점검 및 보수

․도로굴착복구 공사설계 및 시공감독

․도로굴착복구기금 관리운영 및 감독업무보조원 운영

․도로굴착복구비 부과 및 징수(체납)관리

도로굴착팀

․가로등, 보안등시설물 유지관리 및 공사계획수립 시행

․지하보차도 조명시설 및 승강기(기전)유지관리

․도로조명시설 보수반 운영 및 유지관리용 자재구매 관리

․사고주 처리 및 세외수입관련 업무

도로조명팀

2		도로 및 도로시설물 현황

□ 도   로                                          (단위 : m)

합 계	도로폭원별 연장 현황				비 고
	광 로 (40m이상)	대 로 (25～40m미만)	중 로 (12～25m미만)	소 로 (12m미만)
244,890 (2.695㎢)	10,619 (0.478㎢)	14,939 (0.474㎢)	35,740 (0.577㎢)	183,592 (1.139㎢)	․도로율:16.92% (서울시 22.24%)

□ 도로시설물 현황                                (단위 : 개소)

구 분	계	교량	터널	고가차도	지 하		보도육교	옹벽	비고
					보도	차도
계	33	3	1	4	4	4	10	7
구청관리	27	1	0	2	4	3	10	7
사업소관리	6	2	1	2	0	1	0	0

※ 교    량  3개소 : 한강대교, 노량대교, 고구동산교

터    널  1개소 : 상도터널

고가차도  4개소 : 남고가, 북고가, 한국냉장 앞, 흑석유수지 앞

지하차도  4개소 : 동작, 상도, 신상도, 고구동산

지하보도  4개소 : 갯마을, 국립현충원, 대방역, 본동

보도육교 10개소 : 강남중학교, 노량진수산시장, 노량진역앞, KT동작지사, 노량진초교,

사육신공원, 신남성초교, 견우와직녀, 중앙대입구, 흑석지구대

옹   벽  7개소   : 갯마을입구, 경문고교 앞, 달마사입구, 사육신묘 앞, 상도여중입구,

중대후문 앞, 충혼탑 앞

□ 도로조명 시설현황                              (단위 : 등)

계	가 로 등	보 안 등	비고
13,807	4,446 (차로등3,268, 보행등1,065, 육교등85, 교량하부28)	9,361 (전용주2,967, 한전주4,371, 건축물 2,023)

3		조례·규칙·훈령 및 위원회 현황

□ 조  례(4건)

연번	조 례 명	관련근거	주 요 내 용
1	서울특별시동작구 도로복구 원인자 부담금 징수조례	도로법 제76조	도로굴착으로 인한 도로복구공사가 필요한 경우 비용을 징수
2	서울특별시동작구 도로굴착복구기금 설치조례	지방자치기금관리 기본법 제13조 및 시행령 제7조	도로굴착 공사 시 원인자부담금을 징수하여 도로의 복구공사 및 사후관리의 원활을 위함
3	서울특별시동작구 공사감독업무 위탁에 관한 조례	지방자치법 제104조	시비 전액지원 사업 중 1억원 이상 소요되는 사업에 대하여 서울시시설관리공단에 감독업무 등을 위탁
4	서울특별시동작구 부실공사방지를 위한 주민참여감독자 운영 조례	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제16조	주민이 현장에서 공사 진행과정을 확인·감독함으로써 부실시공 방지 및 주민의견 수렴

□ 규  칙(4건)

연번	규 칙 명	관련근거	주 요 내 용
1	서울특별시동작구 보안등 관리규칙	자체 규칙	보안등 설치 및 보수 관리에 관하여 필요한 기준을 규정
2	서울특별시동작구 보도포장 관리규칙	자체 규칙	보도포장 정비 및 효율적인 유지관리에 필요한 사항을 규정
3	서울특별시동작구 도로굴착·복구업무 처리규칙	도로법 제38조	도로굴착수반에 따른 도로점용관련 업무의 처리 및 사후관리에 필요한 사항을 규정
4	서울특별시동작구 도로굴착복구기금 설치조례 시행규칙	동작구 조례	도로굴착복구기금설치조례에서 위임된 사항과 시행에 관하여 필요한 사항을 규정

□ 훈  령(2건)

연번	훈 령 명	관련근거	주 요 내 용
1	서울특별시동작구 기술자문단 운영규정	재난관리법 제22조 건설기술관리법 제5조의2	도시기반시설이 복잡·대형화됨에 따라 필요시 전문가의 의견 청취 및 효율적인 대처를 위한 자문단을 구성 운영
2	서울특별시동작구 도로관리심의회 설치 및 운영규정	도로법시행령 제34조	도로굴착 공사 시 안전대책 수립 및 중복굴착 방지등 도로의 효율적 관리에 필요한 사항 규정

□ 위원회 및 자문단 구성 근거

구 분	설치근거	구성일	주 요 기 능	임 기
도로관리심의회	도로법시행령 제34조 (도로관리심의회 설치 및 운영규정)	1997.2	•도로굴착 수반한 사업계획 심의·조정 •안전대책소심의회 구성 운영 •중복굴착소심의회 구성 운영	2년 (연임가능)
도로굴착복구 기금운용위원회	지방자치단체 기금관리기본법 제13조 및 시행령 제7조 (도로굴착복구기금 운용심의위원회설치조례)	1998.2	•기금운용계획 및 결산 적정성 심의 •주요 지출항목, 금액변경 타당성 심의 •기타 기금운용 및 관리변경 등 심의	2년 (연임가능)
동작구 기술자문단	동작구 기술 자문단운영규정 (훈령)	2000.3	•도로시설의 안전진단, 복구대책 등에 관한 기술자문 •공사 시행의 적정성 및 공법에 관한 자문 •기타 구청장이 필요하다고 판단하여 자문하는 사항	2년 (연임가능)

□ 위원회 구성 현황

구 분	구성인원			위촉현황
	계	당연직	위촉직	계	당연직	위촉직
도로관리심의회	21	10	11	21	10	11
도로굴착복구 기금운용위원회	9	6	3	9	6	3
동작구 기술자문단	30	-	30	30	-	30

Ⅱ. 2014 주요업무계획

기관비전			참 좋은, 사람중심의 명품동작 건설
부서목표			사람 중심의 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
추진전략			◦ 도시기반시설 확충 및 체계적 도로망 구축 ◦ 보도공사 부실시공 방지 및 보행자 중심의 도로환경 조성 ◦ 밝고 안전한 야간환경 조성 및 에너지 절약 향상
추진과제	신규		◦ 본동 동양중학교 옆 도로개설공사 시행 ◦ 노후·불량도로 정비공사 시행(구 주민참여 예산) ◦ 노후·불량도로 정비공사 시행(서울시 주민참여 예산) ◦ 급경사도로 제설작업 자동화 시범사업 시행 ◦ 불합리한 교차로 구조개선공사 시행
	계속
			◦ 남성초교앞 교차로 주변 공공공지 조성공사 시행 ◦ 사당동 진흥APT 옆 도로개설공사 시행 ◦ 포장도로 유지관리사업(연간단가) 시행 ◦ 도로시설물 유지관리사업(연간단가) 시행 ◦ 도로굴착·복구공사(연간단가) 시행 ◦ 도로조명시설물 유지관리사업(연간단가) 시행

주 요 사 업

1. 본동 동양중학교 옆 도로개설공사 시행 ------------(신규)

장기간 비포장 현황도로로 주민 통행에 불편을 주고 있는 주택가 이면도로에 대하여 소방도로 기능 확보와 주민 통행불편 해소를 위하여 도로개설 공사를 시행코자 함

□ 사업개요

◦ 사업위치 : 본동 19-66~24-2(동양중학교 옆)

◦ 사업규모 : B=4m, L=90m

- 보상내역 : 토지 4필지, A=138㎡(대지2필지 21㎡, 임야2필지 117㎡)

◦ 사업기간 : 2014. 2 ~ 12

◦ 총사업비 : 300백만원(보상비200, 공사비85, 설계용역비15)

□ 추진내용

◦ 2012.  1   : 도시계획시설(도로)결정 고시(동작구 고시 제2012-5호)

◦ 2013. 12  : 2013년도 하반기 서울시 특별교부금 교부(간주처리. ‘14명시이월)

◦ 2013. 12  : 도시계획선 분할측량 및 현황측량

◦ 2014.   1  : 지적분할 및 현장 물건조서 작성

□ 추진일정

◦ 2014.   2~3  : 실시설계용역 시행

◦ 2014.   3  : 도시계획시설(도로)실시계획 인가를 위한 열람공고

◦ 2014.   3  : 도시계획시설(도로)실시계획 인가고시

◦ 2014.  4~6  : 감정평가 손실보상협의(건설관리과)

◦ 2014.  7~12 : 공사 시행

□ 목    표

◦ 비포장 도로 정비로 학교주변 환경개선 및 주민 통행불편 해소

◦ 주변 도로망 연계체계 및 원활한 국지도로 기능유지

(단위:백만원)

구 분	추진목표
	2014	2015	2016	2017	2018
소방도로 확충	300

□ 위 치 도

도로개설

(B=4m, L=90m)

□ 현황사진

2. 노후·불량도로 정비공사 시행(구 주민참여 예산)-----(신규)

우리구 주민참여예산 사업으로 선정 예정인 노후․불량 도로 및 도로시설물을 정비하여 안전한 도로환경 조성과 주민 숙원사업 해소에 기여코자 함

□ 사업개요                                            (단위:천원)

연번	사 업 구 간	규 모	예 산	비고
	계		662,000
1	노량진동 249-328 안전한 골목길 만들기사업	차도정비 2.8a B=4m, L=70m	25,000
2	명수대한양(아)~ 흑석동 292번지 도로포장	차도정비 2.4a B=4m, L=60m	20,000
3	사당동 272-4 ～ 272-38 외 1개소 비탈길 안전대 설치	핸드레일 설치 L=120m	17,000
4	사당1동 친환경 노면관리를 위한 보도블록 설치	보도정비 40a 등	300,000
5	신대방동 685-10～ 692-66 보도블록 정비	보도정비 36a B=3m, L=1,200m	300,000

□ 추진내용

◦ 2013. 9. 6   : 주민참여 예산사업 검토 요청(도로관리과→기획예산과)

◦ 2013. 9. 27   : 구 주민참여 예산위원회 개최 및 사업선정

◦ 2013. 12      : 2014년도 예산 편성

◦ 2014.   1      : 현장 물량조사 및 도면 작성

□ 추진일정

◦ 2014. 2      : 공사 설계

◦ 2014. 3～4  : 공사 발주 및 착공

◦ 2014. 9     : 공사 준공

□ 목 표

◦ 안전하고 쾌적한 사람중심의 도로환경 조성

(단위:백만원)

구 분	추 진 목 표
	2014	2015	2016	2017	2018
도로 및 도로시설물 정비	662

□ 위 치 도

1. 노량진동 249-328 안전한 골목길 만들기 사업

2. 명수대한양(아)~흑석동 292번지 도로포장

3. 사당동 272-4 ~ 272-38외 1개소 비탈길 안전대 설치

사당동 272-4 ~ 272-38	사당동 303-99 ~ 303-171

4. 사당1동 친환경 노면관리를 위한 보도블록 설치

5. 신대방동685-10～692-66 보도블록 교체

3. 노후·불량도로 정비공사 시행(서울시 주민참여 예산) --(신규)

서울시 주민참여예산 사업으로 선정된 노후․불량 도로 및 도로시설물을 정비하여 안전한 도로환경 조성과 주민 숙원사업 해소에 기여코자 함

□ 사업개요                                           (단위:천원)

연번	사 업 구 간	규 모	예 산	비 고
	계		425,000
1	사당동 266-7~312-9	보도정비 20a 측구 및 경계석 500m	300,000
2	신길초교 주변 외 1개소 보도정비공사 시행	보도정비 6a B=3m, L=200m	75,000
		점자블록 정비 L=150m	5,000
3	사당동 161-67 외 2개소 정비공사	계단정비(195㎡) 핸드레일 설치(80m)	45,000

□ 추진내용

◦ 2013. 5. 15 : 주민참여 예산사업 검토 요청(도로관리과→기획예산과)

◦ 2013. 7. 27 : 서울시 주민참여 예산위원회 개최 및 사업선정

◦ 2013. 12      : 2014년도 예산 편성(서울시)

◦ 2014.   1      : 현장 물량조사 및 도면 작성

□ 추진일정

◦ 2014. 2   : 공사 설계

◦ 2014. 3～4  : 공사 발주 및 착공

◦ 2014. 9     : 공사 준공

□ 목    표

◦ 보도공사 부실시공 방지 및 보행자 중심의 쾌적한 도로환경 조성

(단위:백만원)

구 분	추 진 목 표
	2014	2015	2016	2017	2018
도로 및 도로시설물 정비	425

□ 위 치 도

1. 사당동 266-7~312-9

2. 대방동 신길초등학교 주변 외 1개소

대방동 신길초등학교 정문 앞	보라매로 91 ~ 보라매로 67

3. 사당동 161-67외 2개소

사당동 161-67	사당동 162-9	상도동 184-26

4. 급경사도로 제설작업 자동화 시범사업 시행 --(신규)

□ 사업개요

◦ 사업위치

• 서달로[흑석동 252-18 ∼ 253-1간]

• 고구동산로[노량진동 산11-20(극락정사) ∼ 노량진동 455-6간]

◦ 사업규모 : B=8m , L=600m(서달로300m, 고구동산로300m)

【자동염수살포장치(특허 제0965788호)】

• 액상용 염화용액 탱크 5,000ℓ(FRP, H=2.3m, D=2.5m) : 2대

- 콘테이너 내부에 설치(3m × 4.2m)

• 펌프(5HP) : 2대, 콘트롤 스위치 2대, 배관 600m(노즐40set)

◦ 사업기간 : 2013. 12. ~ 2014. 2.

◦ 총사업비 : 230백만원

□ 추진내용

◦ 2013.   8   : 1부서 1정책개발 과제 제출

◦ 2013.   9   : 1국 1우수정책 대상 사업 선정

◦ 2013. 9~10 : 현장조사 및 관련부서 협의

◦ 2013.   9   : 2013년도 하반기 서울시 특별교부금 신청

◦ 2013. 12   : 2013년도 하반기 서울시 특별교부금 교부

◦ 2013. 12   : 자동염수살포장치 구매

□ 추진일정

◦ 2014. 1~2 : 자동염수살포장치 설치

□ 목    표

◦ 강설시 급경사지 마을버스 노선 조기 제설작업 시행으로 주민 통행불편 해소

(단위:백만원)

구 분	추진목표
	2014	2015	2016	2017	2018
제설작업 자동화 시행	230

자동염수살포장치 소개

	자동염수살포장치 구성

	자동염수살포장치 설치 사례

구 분	동작대교북단 (이촌램프)	퇴계로	동작대교북단 (서빙고램프)
위치도
전 경

□ 위치도 및 현황사진

1. 서달로[흑석동 252-18 ~ 253-1간]

(B=8m, L=300m)

2. 매봉로[노량진동 산11-20(극락정사) ~ 노량진동 455-6간]

(B=8m, L=300m)

5. 불합리한 교차로 구조개선공사 시행 --------(신규)

지형 여건상 급경사지에 설치되어 교통사고 위험 및 보행자의 통행불편을 주고 있는 불합리한 교차로에 대하여 도로 구조를 개선하여 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성하고자 함

□ 사업개요                                        (단위:백만원)

구 분	위 치	규 모	소요예산	비고
계			300
만양로	노량진1동329-15앞 사거리 (신동아리버파크 APT)	B=16m L=70m	120
흑석로	상도1동7-88앞 삼거리 (중앙대 후문)	B=18m L=110m	180

◦ 사업기간 : 2014. 1 ~ 10.

◦ 총사업비 : 300백만원(설계용역비19, 공사비281)

□ 추진내용

◦ 2011.   4    : 제20회 구청장과 함께하는 참 좋은 대화의 날 주민건의

◦ 2011.   8  : 불합리한 교차로 구조개선공사 시행 방침(구청장)

◦ 2011. 11  : 2012년도 예산반영 요청(미반영)

◦ 2012. 11   : 2013년도 예산반영 요청(미반영)

◦ 2013.   9  : 2013년도 하반기 서울시 특별교부금 신청

◦ 2013. 12  : 2013년도 하반기 서울시 특별교부금 교부

□ 추진일정

◦ 2014. 2~3 : 실시설계용역 시행

◦ 2014.   4    : 공사 발주 및 착공

◦ 2014. 10   : 공사 준공

□ 목    표

◦ 교차로 도로 구조 개선으로 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

(단위:백만원)

구 분	추진목표
	2014	2015	2016	2017	2018
불합리한 교차로 도로 구조개선	300

□ 위 치 도 ①노량진1동 329-15앞 사거리

□ 현황사진

□ 위 치 도 ②상도1동 7-88앞 삼거리(중앙대 후문)

□ 현황사진

6. 남성초교앞 교차로 주변 공공공지 조성공사 시행 -(계속)

대로변에 도시미관을 저해하고 있는 기존 무허가건물을 철거 후 주민
휴식공간을 제공하기 위하여 도시계획시설(공공공지)사업을 시행코자 함

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사당동 324-20번지(남성초등학교 앞 교차로 주변)

◦ 규    모 : 공공공지 조성 686㎡(무허가건물 철거 8동)

◦ 총사업비 : 350백만원(보상비 330, 공사비 20)-‘12시교부금

◦ 사업기간 : 2013. 6 ~ 2014. 6

□ 추진내용

◦ 2011. 11 : 지역주민 및 남성초등학교 진정민원 제기

◦ 2012.  2  : 도시계획시설(공공공지) 결정 방침(구청장)

◦ 2012.  3  : 도시계획시설(공공공지) 결정 고시(동작구 고시 제 2012-37호)

◦ 2012. 12  : 서울시 하반기 특별교부금 교부

◦ 2013.  1  : 지적현황측량 시행(대한지적공사)

◦ 2013.  4  : 실시계획 인가를 위한 열람공고(동작구 고시 제 2013-275호)

◦ 2013.  6  : 도시계획시설(공공공지)사업 실시계획 인가(동작구 고시 제 2013-72호)

◦ 2013.  7  : 손실보상계획수립 및 열람·공고(주택과)

◦ 2013.  8 ~ 9 : 감정평가 의뢰 및 협의보상금 산정(주택과)

◦ 2013. 10~12 : 손실보상협의(주택과)

□ 추진일정

◦ 2014.  1~2 : 수용재결신청(미협의 시) 및 재결보상금 지급(공탁)

◦ 2014.  3~4 : 무허가건물 철거(주택과)

◦ 2014.  5~6 : 현장주변 정비

□ 추진목표

◦ 사당로 주변 기존 무허가건물 철거 등을 통한 도시경관 제고

◦ 사당로변 주민 휴식 공간 제공(공공공지 조성)

(단위:백만원)

구 분	추 진 목 표
	2014	2015	2016	2017	2018
공공공지 조성	350 (사고이월)

□ 위 치 도

□ 현황사진

7. 사당동 진흥APT 옆 도로개설공사 시행------(계속)

주택가의 노폭이 협소하여 차량 통행에 불편을 주고 있는 병목구간에 대하여 인접 도로와의 연계성 및 소방도로 기능 확보를 위하여 지장건물 보상 후 도로를 개설코자 함

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사당4동 284-35~288-15간(진흥APT 옆)

◦ 규    모 : B=6m, L=100m

- 보상내역  : 기존무허가 건물2동, 66㎡ (708-719호 33㎡, 708-720㎡호 33㎡)

◦ 총사업비 : 188백만원(보상비70, 공사비118)-‘13市교부금

◦ 사업기간 : 2013. 6 ~ 2014. 6

□ 추진내용

◦ 2011.  5 : 제21회 구청장과 함께하는 참 좋은 대화의 날 주민건의

◦ 2011. 10 : 도시계획시설(도로) 결정 고시(동작구 고시 제2011-73호)

◦ 2013.  4  : 2013년도 추경(1차) 편성

◦ 2013.  6   : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 인가고시(동작구 고시 제2013-75호)

◦ 2013.  8 ~ 9 : 감정평가 의뢰 및 협의보상금 산정(주택과)

◦ 2013. 10~11 : 손실보상협의(주택과)

◦ 2013. 11 : 공사발주 및 계약

◦ 2013. 12 : 실시계획변경(기간연장) 인가를 위한 열람공고
(동작구 고시 제2013-1002호)

◦ 2013. 12 : 실시계획변경(기간연장) 인가고시
(동작구 고시 제2013-160호)

□ 추진일정

◦ 2014.  2~3 : 이주 완료

◦ 2014.  3~4 : 무허가건물 철거

◦ 2014.  6     : 공사 준공

□ 목    표

◦ 통행 장애 지장건물 철거 후 소방도로 확충으로 주민불편 해소

◦ 노후 된 도로정비로 주변 환경 개선

(단위 : 백만원)

구 분	추 진 목 표
	2014	2015	2016	2017	2018
소방도로 확충	188 (사고이월)

□ 위 치 도

□ 현황사진

8. 포장도로 유지관리사업(연간단가) 시행-------(계속)

노후·파손 등으로 불량한 관내 포장도로에 대하여 연중 유지보수를

지속적으로 시행함으로써 안전하고 쾌적한 도로환경 조성에 기여코자 함

□ 사업개요                                       (단위 : 백만원)

※ 불량맨홀 정비는 우리구에서 선시공하고 관리기관에 징수하여 세입조치

사 업 명	위 치	공사규모	사업비	비 고
도로정비(2건)			930
포장도로 유지보수공사 (연간단가)	관내 전지역	차도정비 210@ 보도정비 25@	800
불량맨홀 정비공사 (연간단가)	관내 전지역	맨홀보수 180개소	130

◦ 소요예산 : 930백만원

◦ 사업기간 : 2014. 3 ~ 2015. 2

□ 추진내용

◦ 2013. 4     : 공사 착공

◦ 2014. 2      : 공사 준공

□ 추진일정

◦ 2014. 1~2 : 공사 설계(자체)

◦ 2014. 2    : 공사 발주 및 계약

◦ 2014. 3    : 공사 착공

◦ 2015. 2    : 공사 준공

□ 추진목표

◦ 도로의 포장상태 수준 향상

◦ 불량맨홀 사고예방을 위한 신속한 정비 및 원인자 부담금 부과 징수

(단위 : 백만원)

구 분	추 진 목 표
	2014	2015	2016	2017	2018
계	930	1,900	1,900	2,000	2,100
포장도로유지관리	800	1,700	1,700	1,800	1,900
불량맨홀 정비	130	200	200	200	200

9. 도로시설물 유지관리사업(연간단가) 시행-----(계속)

관내 노후화된 도로시설물에 대하여 연중 유지보수를 시행함으로써 안전하고 쾌적한 도로환경 조성에 기여코자 함

□ 사업개요

◦ 도로시설물 현황

- 고가차도, 보도육교, 지하차도, 지하보도, 옹벽 등 27개소

◦ 도로부속시설물 현황

- 펜스 39,445m, 볼라드 764개, 과속방지턱 964개 등

◦ 소요예산 : 350백만원                             (단위 : 백만원)

사 업 명	위 치	사업개요	사업비
도로시설물 유지보수공사(연간단가)	관내 전지역	도로시설물 정비 1식	350

◦ 사업기간 : 2014. 3 ~ 2015. 2

□ 추진내용

◦ 2013. 4     : 공사 착공

◦ 2014. 2     : 공사 준공

□ 추진일정

◦ 2014. 1~2 : 공사 설계(자체)

◦ 2014. 2    : 공사 발주 및 계약

◦ 2014. 3    : 공사 착공

◦ 2015. 2    : 공사 준공

□ 추진목표

◦ 도로시설물의 성능향상 및 안정성 제고

(단위 : 백만원)

구 분	추 진 목 표
	2014	2015	2016	2017	2018
도로시설물 유지보수	350	700	700	700	700

10. 도로굴착·복구공사(연간단가) 시행----------(계속)

주민생활과 밀접한 도시기반시설(상수도, 도시가스, 전기, 통신 등) 공급을 위한 도로굴착 허가신청에 따른 도로굴착·복구공사의 연중 시행함으로 주민생활불편을 최소화하고자 함

□ 사업개요

◦ 사업대상 : 도로굴착·복구 허가에 따른 도로의 굴착복구공사 시행(연중)

◦ 소요예산 : 500백만원

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	예 산			비 고
		계	기투자	‘14예산
도로굴착복구공사(연간단가)	차도정비 60@ 보도정비 40@	500	-	500	구기금

◦ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2015. 2

□ 추진내용

◦ 2013. 4     : 공사 착공

◦ 2014. 2     : 공사 준공

□ 추진일정

◦ 2014. 1~2: 공사 설계(자체)

◦ 2014. 2    : 공사 발주 및 계약

◦ 2014. 3    : 공사 착공

◦ 2015. 2    : 공사 준공

□ 추진목표

◦ 신속한 도로 굴착·복구 시행으로 주민통행불편 최소화

◦ 합리적인 도로굴착기금 운용

(단위 : 건/백만원)

구 분		추 진 목 표
		2014	2015	2016	2017	2018
허 가 건 수		1,100	1,000	1,000	1,000	1,000
	기금조성 목표액	390	400	400	500	500
	도로굴착복구공사(연간단가)	500	500	500	500	500

11. 도로조명시설물 유지관리사업(연간단가) 시행--(계속)

노후 도로조명(보안등, 가로등) 시설물을 연중 정비하여 전기안전사고를

예방하고, 합리적인 조도 개선으로 야간 통행불편 해소와 주택가 범죄예방에 기여코자 함

□ 사업개요

◦ 보안등시설물 현황

계	한전주 부설	전용주 부설	건축물 부설	비 고
9,361개	4,371개	2,967개	2,023개

◦ 가로등시설물 현황

계	차로등	보행등	육교등	교량하부
4,446개	3,268개	1,065개	85개	28개

◦ 소요예산 : 540백만원                                 (단위:백만원)

사 업 명	위 치	사 업 개 요	사업비	비 고
2건			540
도로조명시설물 정비공사(연간단가)	관내 전지역	가로등 정비 : 20본, 세척 및 선로보수 3,500개소	250
보안등시설물 정비공사(연간단가)	관내 전지역	보안등 신설 및 개량 : 120본, 보안등 고장수리 3,500건	290

◦ 사업기간 : 2014. 3 ~ 2015. 2

□ 추진내용

◦ 2013. 2     : 공사 착공

◦ 2014. 2     : 공사 준공

□ 추진일정

◦ 2014. 1~2: 공사 설계(자체)

◦ 2014. 2    : 공사 발주 및 계약

◦ 2014. 3    : 공사 착공

◦ 2015. 2    : 공사 준공

□ 추진목표

◦ 지속적인 에너지 절약 추진을 위하여 고효율 자재로 교체

◦ 범죄 예방을 위해 야간 골목길 사각지역 해소

(단위:백만원)

구 분	추 진 목 표
	2014	2015	2016	2017	2018
계	540	750	850	850	950
가로등시설물유지관리	250	350	400	400	450
보안등시설물유지관리	290	400	450	450	500

일 반 업 무

1. '13/'14년 겨울철 제설대책 추진----------- (계속)

’13/’14년 겨울철 강설시 관내 주요 간선도로 및 이면도로에 대한   제설작업을 신속하게 실시하여 교통소통과 주민 통행불편 최소화를    위해 한발 앞서가는 제설대책을 수립 추진코자 함

□ 도로현황

◦ 총연장 243km(시도 16km, 구도 227km)

◦ 도로시설물 현황                                     (단위 : 개소)

계	교 량	고가차도	지하차도	지하보도	보도육교	옹벽
27	1	2	3	4	10	7

□ 제설장비 현황                                    (단위 : 개)

구 분	계	제 설 차 량			살포기	삽 날
		다목적차	덤프트럭	소형트럭
대 수	60	3	1	15	32	9

□ 추진현황

◦ 비상근무 현황

평 시	비 상 근 무
	계	보강	1단계	2단계	3단계
76일	35회/45일	19회/23일	14회/20일	2회/2일	-

◦ 제설자재 사용 현황

(단위 : 톤)

구 분	확 보 량	사 용 량	잔 량
계	2,021	1,597	424
염화칼슘	1,001	881	120
소 금	1,020	716	304

□ 추진계획

◦ 제설대책 기간 : 2013.11.15 ~ 2014.3.15(4개월간)

- 제설대책본부 설치·운영(안전치수과 재해대책상황실)

◦ 제설작업 책임구역 지정

- 서 울 시 : 올림픽대로, 노들로, 한강교량, 동작대로, 양녕로 및 상도로 일부구간

- 구    청 : 주요간선도로 9개 노선 17.1km

마을버스 노선(보조간선도로 포함) 18개 노선 12km

※ 제설작업 민간용역 시행

- 동 주민센터 : 이면도로, 보도육교, 지하보도, 간선도로 보도 및 버스승강장 등

- 주    민 : 내 집∙내 점포 앞 도로(보도)

◦ 주요 제설자재 확보계획                                (단위 : 톤)

계	염화칼슘	소 금
2,070톤	830톤	1,240톤

※ 전년도 잔량 포함(염화칼슘 및 소금 424톤)

◦ 소요예산 : 299백만원(자재구입 등209, 제설용역90)

2. 장기 미집행 도시계획시설(도로) 매수청구--------(계속)

◦ 법적근거

∙ 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제47조(2002.1.1 시행)

◦ 대    상

∙ 도시계획시설 결정고시일로부터 10년 이내에 도시계획시설사업이 시행되지 않은 경우 그 도시계획시설부지 중 지목이 대(垈)인 토지

◦ 추진절차

매수청구 신청(접수)	6개월 내 결정통보	매수결정		2년 이내 매수
					□	비매수 시
		비매수결정		일정 건축물 건축 가능
		결정미통보

◦ 추진실적

(2014.1월)

구분	매수 청구 신청 (2002.1.1 ~2013.12 )	매수 결정 사항		비고
		매수	비매수
필지 수	28	21	6	(진행 중 1건)
면적(㎡)	3,017	2,010	524	(483)
소요예산(천원)	3,449,261	2,694,277	754,984	-

◦ 대응방안

∙ 매수 결정 토지 ⇒ 2년 이내 매수

도시계획시설(도로)사업 우선 시행

∙ 매수 부결 토지 ⇒ 도시계획시설(도로) 결정 해지 검토

3. 동작구 기술자문단 운영-----------------------(계속)

◦ 관련근거

∙ 재난 및 안전관리 기본법 제75조(안전관리자문단의 구성·운영)

∙ 서울특별시동작구 기술자문단 운영규정

◦ 구성현황

∙ 분   야 : 토목, 건축, 조경 등 11개 분야

∙ 자   격 : 대학교수, 관련분야 전문가, 그 밖에 학식과 경험이 풍부한 자 등

∙ 위원 수 : 30인 이내

◦ 분야별 현황

계	도로	토목 시공	토목 구조	건설 안전	토질 기초	상하 수도	교통	조경	건축	수자원	도시 계획
30	2	4	3	2	3	3	3	3	3	2	2

◦ 최근 2년간 활용실적(2011~2012년)

구분	계	도로·시설물	하수·치수	건축·주택	공원·녹지	비고
건수	31	15	8	7	1	‘13년 실적 12건/26명
인원	79	43	24	11	1

◦ 자문수당 지급 : 100,000원/1회(8시간 이내)

◦ 소요예산 : 3,600천원(100,000원×3명×12회)

◦ 주요 자문내용

∙ 도시기반시설 등 주요시설물에 대한 안전점검 및 대안제시

∙ 공사 설계 및 시공에 대한 적정성 검토

∙ 새로운 공법, 기술에 대한 자문

◦ 운영방법

∙ 자문안건에 따라 자문단의 위원 중 해당분야 위원을 선정 후 서면 및 현장자문 실시

∙ 안건 발생 시 마다 수시 운영