정유나의원 질문 답변 자료

<질문요지>  --------------------------- (도로관리과 도로사업팀)

◦ 도로 열선 설치에 관하여

<답변사항>

◦ 정유나 의원님이 질의하신 “도로 열선 설치 사업”에 대하여 답변드리겠습니다.

◦ 우리 구에서는 원격 가동 및 초동 제설능력이 뛰어난 도로열선을 확충하여 강설 시 주민 불편을 해소하고 안전사고를 방지하기 위해 자동도로열선 확충사업을 적극 추진 중에 있습니다.

◦ 설치구간은 동주민센터에서 제출한 설치요청 급경사로 137개소에 대해 전수조사를 실시하고 평가기준(통행량, 경사도, 응달여부 등)에 따라 우선 설치구간 24개소를 선정하였습니다.

◦ 2022년에는 관련예산 총 4,185백만원(국 900 / 시 1,535 / 구 1,750)을 확보하여 우선 설치구간 20개 구간에 대해 설치 중에 있으며 2023년에도 구비 및 시비 등 관련 예산을 확보하여 잔여 4개소를 설치 완료할 예정입니다.

구 분		설치개소	설치연장 (m)	예산액 (백만원)	비고
합 계		24	3,457	5,685	국 900 / 시 1,535 / 구 3,250
2022년	1차(‘22.09.~‘22.11.)	5	640	1,020	국 500 / 시 520
	2차(‘22.10.~‘22.12.)	10	1,385	1,750	구 1,750
	3차(‘22.11.~‘23.03.)	5	776	1,415	국 400/시 1,015
	소계	20	2,801	4,185	국 900 / 시 1,535 / 구 1,750
2023년(‘23.01.~‘23.7.)		4	656	1,500	구 1,500

◦ 우선 설치구간 24개소 설치 완료한 후 민원 및 잔여 사업구간 등에 대해 평가기준에 따라 종합평가(2차)를 실시하여 설치 우선순위를 선정하고 시비, 국비 및 구비 등 관련 예산을 확보하여 지속적으로 사업을 추진하겠습니다.

- 2022.12월 현재 : 잔여구간 113개소, 민원 24개소 등