제240회 동작구의회 임시회

2014. 주 요 업 무 계 획

공원녹지과

순        서

Ⅰ. 일 반 현 황	1

Ⅱ. 2014 주요업무계획	3

4

주 요 사 업

1. 시유공원내 테마놀이터 조성(특별교부세,시비)	4

2. 현충근린공원 정비사업 타당성 조사용역(구비)	6

3. 노량진근린공원 조명등 개선공사(특별교부세)	8

4. 노들나루공원 시민쉼터정비(특별교부금)	10

5. 산사태 예방사방사업(시비)	12

6. 근교산 등산로 정비사업(시비)	14

7. 동네뒷산 공원화사업(시비)	16

8. 현충근린공원 공원용지 보상 및 공원조성(시비)	18

9. 중앙하이츠빌(아) 옆 도로복개부지 쌈지공원 조성(구비)	20

22

일 반 업 무

Ⅰ. 일  반  현  황

□ 조 직 현 황

					공 원 녹 지 과
	공 원 팀								조 경 팀					자연생태팀
∙도시공원조성계획 입안 및 결정(변경)업무 ∙도시계획사업(공원)실시 계획인가 업무 ∙도시공원 조성 및 관리							∙도시계획시설(녹지, 공공 공지) 조성 및 관리 ∙마을마당․소규모쉼터 유지관리 ∙도시구조물 벽면녹화 ∙가로수 식재 및 유지관리						∙임야 및 산림보호 ∙재해대책․위험시설물 관리 ∙병해충방제․ 산불예방 ∙동네체육시설 및 약수터관리

□ 인 력 현 황

구 분	계	5급	일 반 직									기능직	청원 경찰
			6급	7급				8 급			9급
			녹지	행정	녹지	토목	전기	행정	녹지	전기	토목
정 원	23	1	3	1	3			1	5	1	1	7
현 원	25	1	3	1	4		1		4			9	2
과부족	+2				+1		+1	-1	-1	-1	-1	+2	+2

□ 시 설 현 황

◦ 장    비                                          (단위 : 대, 개)

계	차량	예초기	전정기	기계톱	분무기	파쇄기	등짐펌프
83	5	22	5	25	4	1	21

◦ 공원현황

구 분	합 계		시 설		미 시 설		비 고
	개소	면적 (㎡)	개소	면적 (㎡)	개소	면적 (㎡)
계	80	4,479,981	59	4,419,068	21	60,913	∙ 구면적의 24.8% ∙ 서울시의 0.67%
근린공원	10	2,875,944	8	2,848,151	2	27,793	∙ 노량진근린공원 등 7개소 - 보라매공원(426,106㎡) - 시직영관리 포함
어 린 이 공 원	34	41,715	28	33,973	6	7,742	∙꿈동산어린이공원 등 34개소
묘지공원	1	1,404,032	1	1,404,032			∙현충묘지공원
역사공원	1	47,832	1	47,832			∙사육신역사공원
문화공원	1	12,209			1	12,209	∙흑석1,2문화공원
소 공 원	19	19,176	7	6,007	12	13,169	∙빙수골공원 등19개소
기타공원	14	79,073	14	79,073			∙강변공원 : 도림천1개소 ∙마을마당 : 4개소 ∙기타공원 : 9개소

◦ 가 로 수                                                (단위 : 주)

노선명	계	은행나무	양버즘나무	느티나무	벚나무	단풍나무	이팝나무	기타
25개 노선	5,550	2,169	926	1,103	730	130	387	105
39.7km	(100%)	(39％)	(17％)	(20％)	(13％)	(2％)	(7%)	(2％)

◦ 녹 지 대

구 분	계	시설녹지	일반녹지	분리대	수 벽	수림대	휴게소	기 타
개 소	150	14	29	2	5	2	5	93
면적(㎡)	228,559	29,136	36,081	3,437	3,386	9,500	5,844	141,175

◦ 동네체육시설 및 약수터

동 네 체 육 시 설				약 수 터
간이 운동장	기구․시설
	계	운동 기구	편의 시설
24개소	1,097점	683점	414점	7개소

Ⅱ. 2014 주요업무계획

기관비전			참 좋은, 사람중심의 명품동작 건설
부서목표			◦ 싱그럽고 여유와 활력이 넘치는 푸른 동작 만들기 ◦ 꽃과 나무로 아름답고 쾌적한 녹색환경 조성
추진전략			◦ 푸른 공간 늘리기 ◦ 공원녹지관리 수준 향상 ◦ 꽃으로 어우러진 아름다운 경관 조성
추진과제	신규		◦ 시유공원내 테마놀이터 조성(특별교부세, 시비) ◦ 현충근린공원 정비사업 타당성 조사용역(구비) ◦ 노량진근린공원 조명등 개선공사(특별교부세) ◦ 노들나루공원 시민쉼터정비(특별교부금) ◦ 산사태 예방사방사업(시비) ◦ 근교산 등산로 정비공사(시비)
	계속		◦ 동네뒷산 공원화사업(시비) ◦ 현충근린공원 공원용지 보상 및 공원조성(시비) ◦ 중앙하이츠빌(아) 옆 도로복개부지 쌈지공원 조성(구비)

주 요 사 업

1		신규사업

1. 시유공원 내 테마놀이터 조성

노량진근린공원 내 노후된 놀이터를 「어린이놀이시설 안전관리법」에 충족하도록 안전한 놀이터로 재조성하여 사고를 미연에 방지하고 어린이들의 흥미를 유발시킴으로써 공원이용활성화 및 만족도향상을 도모하고자 함

□ 사업개요

◦ 위    치 : 동작구 노량진동 325-2 노량진근린공원 외 3개소
(송학대1, 송학대2, 고구동산, 노량진 청소년문화회관 옆)

◦ 규    모 : 1,854㎡

◦ 사업기간 : 2013. 10월 ~ 2014. 6월

◦ 소요예산 : 500백만원(시 주민참여예산 200, 특별교부세 300)

□ 추진내용

◦ 2013. 11 ~ 2014. 3 : 기본 및 실시설계용역 시행

◦ 2014. 3 ~ 2014. 6 : 어린이놀이터 재조성 공사 시행 및 준공

- 포 장 공 : 노후된 고무칩포장 교체, 휴게공간 점토벽돌포장 등

- 시설물공 : 조합놀이대, 그네 등 어린이놀이시설, 휴게시설 등

- 식 재 공 : 놀이터 주변 수목식재

- 기타 부대공 : 부대공사 1식

□ 목    표

◦『어린이놀이시설 안전관리법 』에 의거 어린이놀이시설 설치검사 완료

구 분	추진목표
	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
시유공원내 테마놀이터 조성	실시설계 시행	공사시행·완료

□ 위 치 도

송학대놀이터1

송학대놀이터2

청소년수련시설놀이터

고구동산놀이터

□ 현황사진

노량진공원 송학대 놀이터1	노량진공원 송학대 놀이터2
노량진근린공원 청소년순련시설 놀이터	노량진공원 고구동산 놀이터

2. 현충근린공원 정비사업 타당성조사 용역

달마경로당 일대 복합시설 조성을 위한 현충근린공원 정비사업 타당성조사 용역을 시행하여 향후 우리구의 문화 복지수요를 예측하고 사업시행 가능성을 조사하고자 함

□ 사업개요

◦ 위    치

∙ 흑석동 256-1(달마경로당), 256-50번지 일대 - 현충공원

◦ 규    모 : 2,450㎡

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 6월

◦ 소요예산 : 30백만원(구비 : 용역비 30)

□ 추진내용(계획)

◦ 2014. 1 ~ 6 : 현충근린공원 정비사업 타당성조사용역 시행

◦ 2014. 3 ~ 4 : 용역 자문회의 및 보고회

◦ 2014. 4 ~ 5 : 주민설명회 및 최종의견수렴

◦ 2014. 5 ~ 6 : 용역보고회(중간 및 최종보고)

◦ 2014. 7 ~    : 사업비 확보 및 사업시행

∙ 노인복지회관 건립(노인복지과)

∙ 어린이환경체험학습장 건립(보건기획과)

∙ 캠핑장 조성 : 20개소(1개소당 : 약42㎡(6×7))=840㎡

∙ 동선 및 계단참 설치 : 660㎡

∙ 관리사무소(화장실/창고/샤워실 및 락카) : 200㎡

∙ 주차장 : 약20면(약500㎡), 진입도로 확․포장(약150m) 등

∙ 취사시설/수도시설/방송시설/CCTV/전기설비 등 : 100㎡

□ 목    표

◦ 2014년 이후 타당성조사 용역 시행 및 사업추진

구 분	추진목표
	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
현충근린공원 정비사업 타당성조사용역	실시설계시행	공원조성계획변경	사업발주 및 시행	공사준공

□ 위치도 및 현황사진

대 상 지

진입도로

3. 노량진근린공원 조명등 개선사업

공원 내 조명등은 1993년 공원조성과 더불어 설치되어 등주 및 지중전선이 노후가 심하여 공원 이용자 불편 및 안전사고 위험이 있으므로 이를 개선(교체)하여 시민의 안전사고 예방 및 밝고 쾌적한 공원환경을 조성하는데 있음.

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2013. 11월 ~ 2014. 6월

◦ 위    치 : 동작구 대방동 350-1일대

동작구 본동 126-450 일대(노량진근린공원)

◦ 규    모 : 조명등(공원등) 설치 87본, 조명등 철거 63본

분전반 설치 5면, 기타 전기공사 1식

◦ 소요예산 : 300백만원(특별교부세)

□ 추진내용

◦ 2013. 11월 ~ 12월 : 공사 설계 및 발주

◦ 2013. 12월          : 공사 계약 및 착공

◦ 2014.  1월 ~ 6월 : 공사 시행 및 준공

□ 목    표

◦ 2014년 동작구 노량진근린공원 조명등 개선사업 완료

구 분	추진목표
	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
조명등 개선(교체) 사업	공사계약·시행	공사시행·완료

□ 위치도 및 현황사진(대방동 350-1 일대)

노량진근린공원(대방동)

□ 위치도 및 현황사진(본동 126-450 일대)

노량진근린공원(본동)

4. 노들나루공원 시민쉼터 정비

동작구 관문이며 한강변에 위치한 노량진배수지 상부 공원이 조성 된지 오래되고 시설이 매우 노후되어 공원내 동선단절, 포장시설 파손 등 공원기능을 상실하여 공원 재정비 사업으로 시민 휴식공간 조성

□ 사업개요

◦ 위    치 : 동작구 본동 258-1

◦ 규    모 : 44,580㎡

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월

◦ 소요예산 : 850백만원(특별교부금)

□ 추진내용

◦ 2013. 10. 28 ~ 29 : 현장시장실

◦ 2013. 10. 30 : 특별교부금 요청

◦ 2013. 12.  9  : 특별교부금 교부

◦ 2014. 1 ~ 5  : 설계용역 시행 및 준공

◦ 2014. 6 ~ 12  : 공사시행 및 준공

□ 목    표

◦ 노들나루공원을 재정비하여 쾌적한 공원환경 제공

구 분	추진목표
	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
노들나루공원 시민쉼터정비	실시설계 시행	설계완료,공사발주	공사시행·완료	공사시행·완료

□ 위 치 도

□ 현황사진

그늘막 등 시설물 노후	타일포장 파손
바닥 배수불량	바닥꺼짐, 배수불량

5. 산사태 예방사방사업

산림 내 위험 계곡수로 등 수해 취약지역 정비를 통한 산사태 예방 및   주민들의 안전을 도모코자 함

□ 사업개요

◦ 위    치 : 사당동 산32-2(까치산 근린공원) 등 4개소

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 6월

◦ 규    모 : 계간수로 정비 100m, 사면정비

◦ 소요예산 : 190백만원(시비)

□ 추진내용

◦ 2014. 1 ~ 3 : 현장물량 조사 및 실시설계용역

◦ 2014. 4 ~ 6 : 예방사방사업 시행 및 준공

∙ 시 설 공 : 계간수로, 사면정비, 집수정설치 등

∙ 식 재 공 : 수목식재 등

∙ 부 대 공 : 폐기물처리 등

□ 목    표

◦ 계간수로 정비 및 수목식재

구 분	추진목표
	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
산사태 예방사방사업	실시설계 시행	공사시행

□ 위 치 도

노량진근린공원

- 대방동 350-5

상도동 211-447

까치산(행림초뒷산)

- 사당동 산32-2

까치산

- 사당동 산32-79

□ 현황사진

6. 근교산 등산로 정비사업

근교산 등산로를 정비하여 민원을 해소하고, 과도한 이용으로 훼손된 등산로를 복원하여 이용자의 등산편의를 도모코자 함

□ 사업개요

◦ 위    치 : 현충근린공원(사당동 산25) 등 3개 공원

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월

◦ 규    모 : 등산로 정비 370m

◦ 소요예산 : 250백만원(시비)

□ 추진내용

◦ 2014. 1 ~  3 : 현장물량 조사 및 실시설계용역

◦ 2014. 4 ~ 12 : 사업시행 및 준공

∙ 시 설 공 : 등산로 정비 370m

□ 목    표

◦ 등산진입로 신규조성 및 훼손등산로 정비

구 분	추진목표
	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
근교산 등산로 정비	실시설계 시행		공사시행

□ 위 치 도

현충근린공원

- 사당동 산25번지

□ 현황사진

2		계속사업

7. 동네뒷산 공원화사업(동작동)

□ 사업개요

◦ 위    치 : 동작동 61-59 등 19필지 일대

◦ 규    모 : 6,028㎡

◦ 사업기간 : 2013년 1월 ~ 2015년 12월

◦ 예 산 액 : 3,951백만원(시비)

구 분	총사업비	기투자(2013)	2014 요구	장 래
설계및공사비	700			700
보상비	3,251	1,803	1,448

□ 추진내용

◦ 2013년 동네뒷산 공원화사업 추진

∙ 보상추진 : 동작동 산16-4등 12필지 2,459㎡ 보상

◦ 2014년 동네뒷산 공원화사업 추진

∙ 보상추진 : 동작동 61-50 등 4필지 1,267㎡

◦ 2015년 동네뒷산 공원화사업 공사시행

∙ 동작동 61-59 등 19필지 6,028㎡ 조성

□ 추진일정

◦ 2014. 1월          : 현장조사 및 보상계획 수립

◦ 2014. 2월 ~  3월 : 현황측량, 도시계획사업 실시계획 변경 열람공고 및 변경인가

◦ 2014. 3월 ~  4월 : 보상계획열람공고 및 감정평가

◦ 2014. 4월 ~ 9월  : 손실협의보상

◦ 2014. 9월 ~ 12월 : 수용재결신청(미협의시)

□ 위 치 도

□ 현황사진

동작동 61-59 일대

8. 현충근린공원 공원용지 보상 및 공원조성

□ 일반현황

◦ 사업기간 : 2007년 ~ 2020년

◦ 위    치 : 동작동, 사당동, 흑석동, 상도동 일대

◦ 면    적 : 1,093,601.1㎡[국유지 540,705㎡(49%), 공유지

215,024.1㎡(14%), 사유지337,872㎡(37%)]

◦ 총 소요예산 : 300,000백만원(시비)

□ 사업개요

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월

◦ 사업내용

∙ 위   치 : 사당동 산10-5(극동@ 뒤편) 등 2개소

∙ 내   용 : 토지보상 3,950㎡, 공원조성 2,500㎡

◦ 예 산 액 : 1,400백만원-시비(보상비 1,000, 공사비 400)

□ 보상 추진현황

연 도 구 분	합 계	2013 이전	2014	2015 이후
보상비(백만원)	300,000	39,514	1,000	259,486
보상면적(㎡)	337,872	76,434	3,950	257,488

□ 추진일정

◦ 보상 추진

∙ 2014. 1월          : 현장조사 및 보상계획 수립

∙ 2014. 2월 ~  3월 : 현황측량, 도시계획사업 실시계획 변경 열람공고 및 변경인가

∙ 2014. 3월 ~  4월 : 보상계획열람공고 및 감정평가

∙ 2014. 4월 ~  9월 : 손실협의보상

∙ 2014. 9월 ~ 12월 : 수용재결신청(미협의시)

◦ 공원조성 추진

∙ 2014. 1월 ~  5월 : 설계용역 시행 및 준공

∙ 2014. 6월 ~ 12월 : 공사 시행 및 준공

□ 공원용지 보상(사당동 산10-5)

위 치 도	현황사진
사당동 산10-5

□ 공원조성(사당동 산21-9)

위 치 도	현황사진

9. 중앙하이츠빌(아) 옆 도로복개부지 쌈지공원 조성

□ 사 업 개 요

◦ 위    치 : 상도동 415-1(상도동 중앙하이츠빌(아) 옆 기부채납도로)

◦ 규    모 : B=8m, L=67m

◦ 조성계획 : 도로개설구간 복개

∙ 상부 : 공원조성(약 1,000㎡), 하부 : 도로 자재창고 사용(약 500㎡)

◦ 소요예산 : 400백만원(구비) - 2013년 추경예산 확보

※ 전기공사 소요예산 100백만원은 2013년 본예산으로 확보

□ 추 진 경 위

◦ 2010.  9. 17 : 주택과에 민원제기(쌈지공원조성 등)

◦ 2010. 11. 26 : 민원대책회의(부구청장)- 주관부서(도로관리과)

◦ 2011.  3. 24 : 주민설명회 및 기술자문

∙ 도로복개후 상부 녹지조성, 하부공간 도로관리과 자재창고 활용

◦ 2012.  5. 10 : 상반기 시 특별교부금 교부(750백만원)

◦ 2012. 12 ~ 2013. 8 : 도로복개공사 시행(특별교부금 7억, 도로관리과)

◦ 2013.  2  7 : 전기공사 발주

◦ 2013. 10. 14 ~ 10. 21 : 공원조성공사 일상감사 시행

◦ 2013. 10. 22 : 공원조성공사 발주

◦ 2013. 11. 11 : 공원조성공사 착공 <공정률 : 20%>

◦ 2013. 12. 13 : 공원조성공사 준공기한 연기 시행

□ 향 후 계 획

◦ 2014.  4. 30 : 공원조성공사 준공

□ 위 치 도

쌈지공원 대상지

□ 현 황 사 진

일 반 업 무

□ 공원 전기시설물정비(연간단가)

◦ 위    치 : 동작구 관내 공원

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월

◦ 규    모 : 58개소

∙근린․역사․문화공원 9개소, 어린이공원 28개소, 소공원 7개소, 기타공원 14개소

◦ 사업내용 : 공원등 신설, 공원등 보수 등

◦ 사 업 비 : 55백만원(구비)

□ 공원 시설물정비(연간단가)

◦ 위    치 : 동작구 관내 공원

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월

◦ 규    모 : 58개소

◦ 사업내용 : 시설물공사, 식재공사, 폐기물 처리 등

◦ 사 업 비 : 80백만원(구비)

□ 상도근린공원 등산로 조명등 설치공사

◦ 위    치 : 동작구 상도동 산65-419일대 동아(아)~국사봉정상

◦ 사업기간 : 2014. 2월 ~ 6월

◦ 사업내용 : 조명등 설치 21본, 분전반 설치 1면, 전기공사 1식

◦ 사 업 비 : 85백만원(구비)

□ 노량진근린공원(대방동) 정비공사

◦ 위    치 : 대방동 350-1일대

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월

◦ 규    모 : 휀스교체 360m, 테니스장 배수로 정비, 산책로 및 사면정비 등

◦ 사 업 비 : 350백만원(시비)

□ 노량진근린공원 조성공사

◦ 위    치 : 대방동 350-1번지

◦ 사업기간 : 2013. 2월 ~ 2014. 6월

◦ 사업내용 : 무허가건물 5동 보상 및 공원조성

◦ 사 업 비 : 1,227백만원-시비(설계 57, 보상 200, 공사 970)

□ 에코스쿨 조성사업

◦ 위    치 : 장승중학교, 강남초등학교

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 11월

◦ 사업내용 : 생태학습장 및 휴게쉼터 조성, 옥상녹화 등

◦ 사 업 비 : 230백만원(시비)

□ 쌈지마당 및 휴게공간 재정비 사업

◦ 위    치 : 상도2동 159-334 상도동 쌈지마당 외 4개소

◦ 사업기간 : 2013. 12. 27 ~ 2014. 4. 26

◦ 규    모 : 661㎡

◦ 사업내용 : 노후 시설물 및 바닥포장 교체, 수목식재 등

◦ 사 업 비 : 300백만원(특별교부세 - 2013. 12월 기확보)

□ 신대방우성아파트 열린녹지 조성(시비:구비 = 6:4)

◦ 위    치 : 신대방동 565번지 신대방우성아파트

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 6월

◦ 사업내용 : 꽃나무, 야생화, 벽면녹화 등을 이용한 힐링쉼터 조성

◦ 사 업 비 : 83백만원(시비 47, 구비 31, 아파트 5)

□ 가로수 보호시설물 정비공사

◦ 위    치 : 만양로

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 6월

◦ 사업내용 : 가로수 보호시설물 30조 정비

◦ 사 업 비 : 10백만원(구비)

□ 가로수 수형조절 전지공사

◦ 위    치 : 등용로, 흑석로, 삼일로

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 3월

◦ 사업내용 : 가로수 가지치기 100주

◦ 사 업 비 : 20백만원(구비)

□ 가로수 보식공사

◦ 위    치 : 상도로 등 가로수 결주 구간

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 6월

◦ 사업내용 : 느티나무 등 3종 15주 보식

◦ 사 업 비 : 10백만원(구비)

□ 가로수 생육환경개선공사(띠녹지조성)

◦ 위    치 : 노량진로(현대자동차남부사업소~노량진역9호선)

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 6월

◦ 규    모 : 648㎡(L=540m,W=1.2m)

◦ 사업내용 : 관목 및 초화류 식재, 토양치환, 경계석 설치 등

◦ 사 업 비 : 180백만원(시비)

□ 공공건물 옥상녹화 조성

◦ 위    치 : 동작구립종합사회복지관(대방동 5-1)

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 6월

◦ 규    모 : 200㎡

◦ 사업내용 : 방수·방근, 수목식재, 휴게시설물 설치, 텃밭조성 등

◦ 사 업 비 : 70백만원(시비 42 구비 28)

□ 도시구조물 벽면녹화

◦ 위    치 : 사당동 710-5 총신대 석축(사당로)

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 9월

◦ 사업내용 : 화단조성 및 덩굴식물 등 식재를 통한 벽면녹화

◦ 사 업 비 : 40백만원(시비)

□ 골목길가꾸기 사업

◦ 위    치 : 대방동 44-212

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 9월

◦ 사업내용 : 주민참여에 의한 골목길 꽃․나무심기

◦ 사 업 비 : 30백만원(시비)

□ 아름다운 꽃길 조성

◦ 위    치 : 노량진로(한강대교입구~동작전회국),상도로(상도역~숭실대입구역)

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월

◦ 규    모 : 3,300m

◦ 사업내용 : 중앙분리대 및 가로등주 걸이화분 1,300조 설치(년2회)

◦ 사 업 비 : 150백만원(구비 120, 시비 30)

□ 동네체육시설 정비

◦ 위    치 : 현충근린공원 등 3개 공원

◦ 사업기간 : 2014. 2월 ~ 11월

◦ 규    모 : 체육 및 편의시설물 등 12종

◦ 사업내용 : 체육 및 편의시설물 설치 및 정비

◦ 사 업 비 : 50백만원(구비)

□ 소나무 생육환경 개선사업

◦ 위    치 : 동작구청사 주변 등 14개소

◦ 사업기간 : 2014. 3월 ~ 11월

◦ 사업내용 : 수간주사, 엽면시비, 가지치기 등

◦ 사 업 비 : 20백만원(구비)

□ 지정보호수 및 노거수 정비사업

◦ 위    치 : 사당4동 281-1 등 6개소

◦ 사업기간 : 2014. 2월 ~ 11월

◦ 사업내용 : 수간주사, 엽면시비, 가지치기 등

◦ 사 업 비 : 10백만원(구비)

□ 약수터 시설물 정비공사

◦ 위    치 : 보라매약수터 등 7개소

◦ 사업기간 : 2014. 2월 ~ 7월

◦ 사업내용 : 약수터 심정 청소 2개소, 음수전 등 시설정비 등

◦ 사 업 비 : 9백만원(구비)

□ 위험시설물 정비공사(연간단가)

◦ 위    치 : 동작동 산27번지 등(현충근린공원 등 3개공원)

◦ 사업기간 : 2014. 2월 ~ 11월

◦ 사업내용 : 배수로 정비 60m, 계단설치, 수목식재 등

◦ 사 업 비 : 30백만원(구비)

□ 위험수목 정비공사

◦ 위    치 : 현충근린공원 등 관내 임야

◦ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 12월

◦ 사업내용 : 위험수목 정비 120주

◦ 사 업 비 : 20백만원(구비)

□ 임야내 소규모 수해복구공사

◦ 위    치 : 사당동 산32-79번지 등(까치산근린공원)

◦ 사업기간 : 2014. 2월 ~ 6월

◦ 사업내용 : 배수로 및 집수정 설치, 사면정비 등

◦ 사 업 비 : 10백만원(구비)